산업단지 신재생에너지 보급 추진 협조

□ 추진배경

○ 세계 경제는 지속가능한 미래를 위해 탄소국경조정제도 등 환경 규제와 관련한 무역장벽이 높아지고 있음

○ 산업단지에 신재생에너지 보급으로 글로벌 경쟁력 강화 필요

□ 추진계획

○ 사업대상 : 도내 산업단지 내 입주기업 및 개별입지 기업

○ 사업내용 : 기업 내 유휴부지(지붕, 주차장) 활용 재생에너지 설비 설치

○ 사업시행 : 업무협약 체결 7개 발전사

※ 업무협약 7개社 : 중부발전, 서부발전, 동서발전, 미래엔서해에너지, JB, LS일렉트릭, 엔라이튼

○ 추진방식 : 입주기업과 발전사 매칭하되 임대형, 자가소비형 등 기업 여건을 고려하여 사업모델 결정

※ 건물 노후화 등 기업별로 상이한 추진 여건을 반영하기 위해 컨설팅 추진

○ 추진절차(총 9 ~ 10개월 소요)

현장실사·설계	⇒	공사계획 협의 구조검토, 인허가	⇒	발전설비 설치 등 공사추진	⇒	사용전검사 계량기 설치 등	⇒	사후관리
1개월		3~4개월		2~3개월		1개월		20년

□ 시군 협조사항

○ 시·군별 사업설명회 순회 개최 시, 일정 및 장소 협조 요청

○ 산업단지 입주기업 참여 및 재생에너지 설비 설치 유도

참고1		태양광 설치사업 산단 입주기업 설명회 일정

지역	산업단지 수	일정	지역	산업단지 수	일정
계	178		서산	19	4. 23.(수) 오후
천안	22	4. 17.(목) 오후	계룡	2	4. 24.(목) 오전
부여	7	4. 18.(금) 오전	논산	14	4. 24.(목) 오후
공주	19	4. 29.(화) 오후 2시	당진	14	4. 25.(금)
서천	5	4. 21.(월) 오전	청양	8	4. 28.(월) 오전
보령	12	4. 21.(월) 오후	홍성	10	4. 28(월) 오후
아산	25	4. 22.(화)	예산	13	4. 29.(화)
태안	3	4. 23.(수) 오전	금산	5	4. 30.(수)

※ 일정은 변경될 수 있으며, 장소는 시군에서 선정 후 통보

참고2		충남형 RE100 사업모델

구 분	임대형	하이브리드형 (임대 80% + 자가발전20%)	자가소비형 (PPA, 구독, 리스)
추진방법 (기업, 공장)	유휴부지(지붕, 주차장 등) 유상제공		유휴부지 무상제공
추진방법 (발전사)	𐤏 유휴부지에 태양광 발전설비 설치 및 유지관리 𐤏 발전설비 설치 시 구조보강 및 누수공사 등 병행 추진
기업, 공장 수익구조	𐤏 유휴부지 임대수익	𐤏 유휴부지 임대수익 𐤏 태양광 발전에 따른 발전 수익	𐤏 태양광 발전에 따른 전기를 20년 동안 고정가격으로 공급받아 전기요금 절감
특 징	𐤏 단순 임대로 기업은 RE100 이행 불가 𐤏 매년 고정적인 임대료 수익 발생	𐤏 임대료가 적으나 발전 설비가 설치됨에 따라 발전 수익 발생 및 RE100 이행 가능	𐤏 기업의 RE100 이행 가능 𐤏 장기적으로 수익률이 높음
비 고	𐤏 계약기간(20년) 만료 후 철거 및 무상인수 등 결정 가능
추진기업	중부발전, 서부발전, 동서발전, JB, 미래엔서해에너지, LS일렉트릭, 엔라이튼	JB	중부발전, JB, 미래엔서해에너지, LS일렉트릭, 엔라이튼

※ 건물의 노후화 및 신용도 등 기업 여건에 따라 수익의 차이가 발생할 수 있음