공주시 고시 제2025 - 112호

도시계획시설(공공청사 : 농업기술센터)증축 사업 실시계획(변경)인가 고시

1. 공주시 우성면 도천리 2-1번지 일원의 도시계획시설(공공청사 : 농업기술센터) 증축 사업에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조, 같은법 시행령 제97조의 규정에 의해 실시계획(변경)을 인가하고 같은 법 제91조 및 같은법 시행령 제100조의 규정에 의하여 실시계획인가 내용을 아래와 같이 고시합니다.

2. 관계도서는 공주시청 도시정책과(☎041-840-7656)에 비치하고 일반인과 토지소유자등 이해관계인에게 보입니다.

2025. 7. 1.

공  주  시  장

1. 사업시행지의 위치

❍ 위치 : 공주시 우성면 도천리 1-1번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭

❍ 사업의 종류 : 도시계획시설(공공청사 : 농업기술센터)사업

❍ 사업의 명칭 : 도시계획시설(공공청사 : 농업기술센터) 증축 공사

3. 사업의 면적 또는 규모

❍ 사업면적: (당초)총 65,916㎡ 중 1,488㎡ / (변경)총 65,916㎡ 중 2,998㎡

❍ 사업규모

- (당초)건물18동 증축(업무시설(교육장)) 건축면적: 499.02㎡, 연면적: 474㎡

- (변경)건물18동 증축(업무시설(교육장)) 건축면적: 499.02㎡, 연면적: 474㎡

건물19동 증축(업무시설(동물보호센터)) 건축면적: 435.77㎡, 연면적: 601.971㎡

건물20동 증축(제1종근린생활시설(두류정선장)) 건축면적: 357.60㎡, 연면적: 327.15㎡

구 분	시 설 개 요		비 고
	당 초	변 경
부지면적	65,916㎡	65,916㎡
건축면적	8,632.12㎡	9,425.497㎡	증)793.377㎡
연 면 적	11,281.74㎡	11,883.711㎡	증)601.971㎡
건 폐 율	13.10%	14.30%	증)1.2%
용 적 율	16.70%	18.10%	증)1.4%

4. 사업시행자의 성명 및 주소

❍ 사업시행자 : 공주시장

❍ 주소 : 충청남도 공주시 봉황로 1

5. 사업의 착수예정일 및 준공예정일

◦ 착수 및 준공예정일 : (당초)2024. 9. 3. ~ 2025. 12. 31. / (변경)2024. 9. 3. ~ 2026. 12. 31.

6. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지ㆍ지번ㆍ지목 및 면적, 소유권과 소유권 외의 권리의 명세 및 그 소유자ㆍ권리자의 성명ㆍ주소

□ 토지조서

순번	위 치			지번	지목	지적면적 (㎡)	공공청사 면적(㎡)	금회신청 면적(㎡)	소 유 자	비고
	도·시	읍·면	동·리
1	공주	우성	도천	1-1	구	253.0	253.0		한국농어촌공사
2	〃	〃	〃	1-2	대	43,933.0	43,861.0	1,488.0	공주시
								2,998.0
3	〃	〃	〃	2-1	대	13,488.0	13,488.0		공주시
4	〃	〃	〃	23-1	대	5,485.0	5,485.0		공주시
5	〃	〃	〃	34-1	대	397.0	397.0		공주시
6	〃	〃	〃	34-4	구	198.0	198.0		한국농어촌공사
7	〃	〃	〃	34-11	대	326.0	326.0		공주시
8	〃	〃	〃	34-12	대	724.0	724.0		공주시
9	〃	〃	〃	35-1	구	36.0	36.0		한국농어촌공사
10	〃	〃	〃	55-1	대	240.0	240.0		농림축산식품부
11	〃	〃	〃	236-1	대	735.0	735.0		공주시
12	〃	〃	〃	251-1	대	79.0	79.0		농림축산식품부
13	〃	〃	〃	376	도	94.0	94.0		국(기획재정부)
합 계						65,988.0	65,916.0	1,488.0
								2,998.0

7. 법 제99조의 규정에 의한 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항 (해당없음)

8. 위치도

■ 위치도

■ 관련 도면

당 초

변 경